제 안 요 청 서

사 업 명	경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작 설치

2024. 9

사 업 명	경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작 설치
주 관 기 관	(재)경기문화재단 경기도어린이박물관
사업 담당자	학예연구팀	구정화 최진실
계약 담당자	기획운영팀	오미미

목  차

I. 사업개요	3

1. 사업목적	3

2. 사업일반	3

3. 입찰 및 낙찰자 결정 방식	4

4. 입찰 참가자격	4

5. 입찰 추진일정	6

II. 과업내용	8

1. 과업범위	8

2. 과업내용	9

3. 과업지침	12

4. 사업수행조건	18

5. 납품목록	19

III. 제안서 작성 및 제출	15

1. 제출도서의 종류 및 규격	20

2. 제출도서의 작성방법 및 목차	22

3. 제안서 작성 지침	23

4. 제안서효력 및 유의사항	24

IV. 제안서 평가 및 계약	25

1. 평가일정 및 방법	26

2. 제안서 평가 항목 및 기준	27

3. 심사결과 공지 및 처리	30

4. 협상 및 계약 체결	30

Ⅴ. 입찰 및 제안서 관련 서식	33

Ⅰ. 사업개요

1		사업목적

1. ‘공동체의 미래’를 주제로 한 상설 전시 개편을 통해 다양한 관계 속에서 형성되는 자신을 인식하고, 우리를 위한 소통과 협력을 배우며, 더 나은 미래를 상상하는 어린이 배움터로서의 박물관 역할 제고

2. 어린이의 정서발달 단계를 고려한 다감각적 전시 연출과 새로운 매체를 반영한 컨텐츠 제공을 통해 어린이의 문화예술 문해력을 증대

3. 3층 아뜰리에 공간을 상설 전시 공간으로 통합하여 개편함으로써 공간 효율성 및 관람객 만족도 제고

2		사업일반

1. 사 업 명 : 경기도어린이박물관 3층 상설 전시 개편 사업

- ‘공동체의 미래’ 전시 설계 및 제작·설치

2. 사업기간 : 계약일로부터 5개월 이내

※ 정책적 변경, 불가항력 등의 사유가 있을 시 협의하여 조정할 수 있음

※ 하자 보수 보증기간은 검수일로부터 2년으로 함

3. 사업금액 : 금 810,000,000원(금 팔억일천만원, 부가가치세 포함)

※ 설계(디자인 포함), 공간 인테리어, 체험물 제작 설치, 저작권료, 손해보험료, 제세공과금 등 모든 비용 포함

4. 개편범위

1) 사업위치 : 경기도어린이박물관 3층 상설전시실

2) 공간규모 : 966㎡ (정확한 면적은 실측으로 재확정)

- 에코 아틀리에: 228㎡ /동화속 보물찾기: 271㎡/ 별난전시실 :102㎡ /내 친구를 소개합니다 : 365㎡

※ 정확한 개편 범위는 현장 설명회에서 공지

※ 기존 전시품 철거는 본 과업에 포함되지 않음

3) 3층 전시실 구성 평면도

3		입찰 및 낙찰자 결정 방식

1. 입찰방법: 제한경쟁 입찰

2. 계약방식: 협상에 의한 계약

3. 관련 근거

1)「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조,44조

(전문성, 예술성, 창작성이 필요한 사업은 협상에 의한 계약 가능)

2)「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 행정안전부 예규 제283호 중

‘제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준’

4		입찰 참가자격

1. 참가 자격

1) ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격을 갖추고 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰마감일 전일까지 다음의 자격을 모두 갖춘 자

①  「중소기업기본법」 제2조에 따른 중ˑ소기업자 및 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중ˑ소기업ˑ소상공인 확인서를 소지한 자

※ “소기업·소상공인 확인서”는 “중소기업제품 공공구매 종합정보망(www.smpp.go.kr)”에서 확인이 안 될 경우 입찰 참가 자격이 없으며, 무효처리합니다.

② 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서 [세부품명 : 실물모형및전시물, 물품분류번호 10자리:6010989901]를 소지한 자

※ 중·소기업·소상공인 확인서 및 직접생산확인증명서는 제안서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

③ 「건설산업기본법」제9조에 의한 실내건축공사업(업종코드 4990)으로 입찰참가 등록한 자

④ 「산업디자인 진흥법」제9조에 의한 산업디자인 전문회사(환경디자인분야)[업종코드 4442] 또는 산업디자인전문회사(환경디자인을 포함한 종합디자인분야)[업종코드 4444]로 입찰참가 등록하고, 직접생산확인증명서[세부품명: 디자인서비스, 세부품명번호 10자리 8214150201]를 소지한 자

2. 공동수급 : 허용

1) 본 사업은 공동이행 방식만 허용하며 공동수급체 간의 면허 보완이 가능하다.

* 본 사업은 하도급을 불허함

2) 공동수급체를 구성하여 제안하는 경우 입찰참가등록 마감일까지 공동수급협정서를 제출해야 하고, 대표업체를 포함한 3개 업체 이내로 구성하고, 구성원이 계약 참여 최소 지분은 10% 이상으로 한다.

3) 공동수급체의 대표업체는 실물모형 및 전시물 제작 업체여야 하며, 대표업체는 본 사업 전체 진행 상황 및 하자보수에 대한 총괄 관리를 해야 한다.

4) 공동수급체 구성원은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 계열사가 아니어야 한다.

5) 동수급체의 구성원은 본 입찰 외의 다른 공동수급체에 중복으로 참가할 수 없고, 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없다.

6) 기타 공동수급체의 구성, 준수사항, 계약 및 이행 등에 관하여 필요한 사항은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제7장 공동계약 운용 요령에 의한다.

3. 자격 제한

1) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조의 규정에 의해 부정당업자로 입찰 참가자격 제한을 받은 자는 제외한다.

2) 응모신청일 기준으로 등록취소, 휴‧폐업, 관련 면허 영업(업무)정지(입찰참가 자격에 규정된 면허에 대해 업무 정지여부 판단), 부정당업체 지정 등 결격 사유가 있는 업체 응모 불가하다.

4. 입찰시 고려사항

1) 제안자는 현실적 조건을 고려하여 계획하고 제안서를 작성해야 한다.

2) 공고 내용이나 공모지침서 등 제안서 요청과 관련하여 견해를 달리하는 경우가 있을 때는 발주처의 의견에 따른다.

3) 제안요청서나 지침에 명시되지 않은 일반적인 사항은「지방자치단체를 입찰 및 계약기준」,「협상에 의한 계약체결 기준」 등을 준수한다.

4) 제안내용 확인을 위하여 추가 자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 한다.

5) 제안신청 서류 작성 및 제출에 소요되는 비용은 입찰 참가자의 부담으로 한다.

6) 제안서에 기재된 내용이 허위로 밝혀졌거나 지침을 준수하지 않은 제안서는 심사 제외 등 불이익을 당할 수 있으며 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

5		입찰 추진일정

1. 선정 절차

사업 공고	⇒	현장설명회 개최	⇒	제안서 접수
제안서 심사	⇒	협상적격자 선정 및 협상	⇒	계약 체결

2. 추진일정

1) 입찰 공고 : 2024.10.4.(금) ~ 2024.10.25.(금)

2) 현장 설명회 : 2024. 10. 14(월) 14:00

3) 제안서 제출 : 2024. 10. 29(화) 10:00∼16:00

4) 제안서 심사 : 2024. 11. 1(금) 14:00∼

※ 제안서 심사 일정 등은 박물관 사정에 의해 변경될 수 있음

※ 설명시간은 업체당 30분(제안설명 20분/질의 응답 10분)

3. 질의 접수 및 회신

1) 질의 기간 : 2024. 10. 10(목) ~ 10.14(월)

2) 응답 기간 : 2024. 10. 16(수)

3) 질의는 질의 서식(서식 제25호)으로 작성하여 이메일로 제출

(e-mail:gcmuseum@ggcf.or.kr/ 031-270-8628)

※ 접수 사실을 전화로 반드시 확인하여야 함

※ 질의서 양식을 사용하고 질의는 1업체당 1회, 문항 당 1페이지로 제한

4) 질의서 작성은 문항 연번 붙이고 제안요청서 해당 페이지를 명확히 알아볼 수 있도록 한다.

5) 질의서상의 기재 사항이 불확실한 경우에는 응답하지 않을 수 있다.

4. . 세부 자료 송부

1) 제안서 작성을 위한 도면, 전시 세부 구성안 등의 자료는 현장설명회 종료후 요청한 업체에 한해 이메일로 제공

① 전시실 도면

② 전시 세부 설명서 (전시품 구성, 예산 구성 등)

※ 전시 기획안 및 관련 자료 등은 전문가 자문 등을 거쳐 변경될 수 있으며, 본 제안요청서와 함께 제공되는 참고 자료가 최종 확정된 안이 아님에 유의할 것

5. 현장설명회 개최

1) 일   시 : 2024년 10월 14일(월) 오후 14시

2) 장   소 : 경기도어린이박물관 2층 강당

3) 내   용 : 전시 개편 세부 설명, 전시실 현장 검토  등

※ 현장설명회 참여한 업체만 제안 가능

6. 제안서 제출

1) 제출장소: 경기도 용인시 기흥구 상갈로 6 경기도어린이박물관 기획운영팀

2) 제출방법: 방문 접수 (※우편 및 이메일 접수 불가)

3) 제출서류: 제안요청서에서 요구한 서류 일체

4) 제출 시 유의사항

① 제안서는 대표자의 인감이 날인된 공식 문서로 직접 방문 제출(날인이 없는 경우 제안으로 인정하지 않음)한다.

② 제출된 제안서는 발주처가 요청하지 않는 한 수정·변경·보완할 수 없다.

③ 제출된 제안서는 일절 반환하지 않으며, 이에 따른 비용은 제안업체가 부담한다.

④ 제출서류 및 증빙자료는 원본으로 제출하여야 하며, 사본의 경우 원본대조필 확인 날인한다.

⑤ 제안서 제출자는 제출일에 사용 인감, 신분증, 명함 지참한다.

⑥ 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정하지 아니하며, 관련 서류 누락시 접수가 불가하다.(단, 심사상 필요 등의 사유로 발주처가 요구하여 제출하는 서류는 제외함)

⑦ 제출된 제안서의 모든 권한은 발주처에 귀속되며 발주처의 필요시 본 자료를 활용할 수 있으며, 심사발표 후 발주처가 임의로 처분할 수 있다.

⑧ 제출된 자료가 허위로 인정될 경우 심사 대상에서 제외되며, 최종 선정된 경우에도 자격이 상실된다.

⑨ 발주기관은 본 과업 수행에 필요하다고 판단하는 경우 협상을 통하여 과업내용, 참여 인력, 추진일정, 기타 사항의 추가 또는 변경을 요구할 수 있으며 이에 필요한 비용은 제안사가 부담한다.

Ⅱ. 과업내용

1		과업범위

1. 공간적 범위

1) 위치: 경기도어린이박물관 3층 상설전시실 (3층) 총 966㎡

※ 면적은 실측으로 재확정 /벽체(전시외벽) ·바닥 ·조명 포함 /기존 전시품 철거는 불포함

2. 내용적 범위

1) 기존 전시실 환경보완, 주제에 따른 전시구성, 세부디자인 연출 계획 수립

: 전시종합(안) 수립 및 제출

: 산업안전 관리계획 수립 및 제출, 공사 안내 현수막 설치 등

2) 실시설계 및 성과품 도서 작성

: 도면, 설계설명서, 시방서, 공정표, 최종내역서, 각종 계산서

3) 어린이박물관 공간 연출 및 전시 체험물 제작 ․ 설치

: 공간구성안에 따른 바닥재 및 벽체 설계 및 설치

: 체험물, 소품, 음향, 영상장비, 현대미술 작품 등의 제작 및 설치

: 그래픽 패널 및 연출 이미지 등 기획 및 제작, 시공

4) 어린이박물관 운영 및 콘텐츠 구현에 수반되는 인프라 구축

: 컨트롤러 설치 및 준비실 마련 그 외, 전시물 설치 및 디스플레이를 위한 모든 제반 사항 마련

5) 전시 주제와 연계한 게이미피케이션을 적용한 관객참여형 프로그램 제작(예:미션 수행, 퀴즈 해결 등 스토리텔링 기반 참여 프로그램 )

6) 어린이박물관 전시실 내 사인물 및 통일성 있는 디자인 개발 적용

: 전시연출에 따른 사진, 영상, 저작권, 음원, 글자체 등 자료 구입 포함

: 사진 촬영, 관련 저작권료, 번역, 검수 자문 포함

7) 체험물품 및 소모품 제작 및 납품

8) 효과적인 유지·관리·운영 방안 매뉴얼 작성 및 운영자 교육

9) 준공 청소 및 어린이박물관 콘텐츠 시범 운영

10) 홍보물 제작(활동지, 기념품 등)

11) 그밖에 과업 목표 달성에 필요하여 발주기관이 요구하는 사항

2		과업내용

1. 기본 방향

1) 경기도어린이박물관의 이미지와 정체성, 전체 분위기를 고려하고, 전시 주제에 맞는 디자인 설계

2) 이용 대상은 6~13세를 대상으로 하되, 미취학 아동과 어린이 동반 가족 및 교사 등 성인 관람객들도 함께 이용하는 공간의 특성을 반영한 디자인

3) 보호자와 어린이의 협업과 상호작용을 통해 방문객이 서로 소통 가능한 체험전시 연출(아날로그 및 디지털 방식 통합 활용)

4) 어린이에게 친근감을 주는 디자인적 요소와 색상 활용하여 흥미 유발

5) 다양한 연령대 어린이 안전을 최우선으로 하고, 친환경자재 사용하여 쾌적한 관람환경 조성

6) 내구성과 완성도 높은 체험물 제작하고 이동과 설치가 용이한 형태로 설계

7) 박물관 현장 작업은 최소화하고, 현장에서는 설치만 가능하도록 설계

※ 본 사업 취지 및 기술적 카테고리, 사업 운영 원칙에 적합한 범위 내에서 자율 제안 가능

2. 개편방향

1) 전 시 명 : <공동체의 미래>(가제)

2) 이용대상 : 6세∼13세(유치원생부터 초등학생)

3) 전 시 물 : 12종 내외 (전시물 9종/작품 3점 이내)

4) 전시주제 : 기후변화와 생물다양성의 손실, 건강과 질병, 차별과 불평등, 식      량 물 주택의 부족, 양질의 일자리와 기회 부족, 인공지능과 새로운 기술사      회에 대한 대응 등 공동체의 다양한 문제를 느끼고 우리를 위한 협력과 소      통을 통해 시민으로서의 참여와 실천을 배운다.

5) 세부지침

① 더 나은 공동체를 위해 실험하고 준비하는 경기도 어린이 배움터의 역         할 강화, 예술가와의 협력을 통한 예술적 경험과 실험의 장 구성한다

② 민주적 의사소통, 신체운동, 사회적 관계의 배움 등 다양한 소통의 방식    과 상호작용 지향(시각, 청각, 후각, 미각, 공감각 등)한다.

③ 공간은 인간과 비인간, 인공물과 생명체 등이 얽혀 살아있는 생태계(공      동체)를 표현한다.

④ 어린이의 개별성과 고유성을 존중하고 다양성을 품은 공간 지향한다.

⑤ 플라스틱의 최소화, 천연소재 활용, 안전성을 고려한 재료 사용한다.

3. 전시공간 연출(안)

1) 개편시 현재 상설전《에코아틀리에》과 《동화속 보물찾기》공간을 통합하여 전시실 1로 구성, 《컬러풀 정글》은 재활용하여 기존의 소극장 성격을 유지하며 매체 기반의 활동 공간으로 활용(진입로 수정), 《내친구를 소개합니다》공간은 통합 프로그램이 가능한 스튜디오로 별도 조성

2) 경기도어린이박물관 3층 상설전시실 개편 기본 개념도

4. 전시내용 구성(안)

1) 기본 구성 :  <모두를 초대해!>, <우리 함께 놀자>, <어린이 미래 실험실>

2) 주제 스토리 보드

나는 다양한 너와 얽혀있는 존재야. 너를 초대해 함께 음식을 먹고 놀이하면서 친구가 되어볼까? 우리는 마치 거대한 그물망 속에 연결된 것 같아. 우리가 힘을 모으고 목소리를 내서 우리 앞의 문제에 대해 생각하고, 미래를 상상해 보자.

3) 세부 구성안

구분	전시물명		내용	연출방법
１	모두를 초대해	변신 정원	입장시 생명체로 변신한 나의 모습이 전시실 곳곳에서 지속적으로 생성되는 것을 경험할 수 있음	키오스크+ 웹캠
２		모두를 향한 연결	몸과 몸을 연결하여 빛이 나는 인터랙티브 파이프를 통해 공감하는 몸을 이해하고, 다양한 관계 속에서 형성되는 자신을 인식함	인터랙티브 파이프
３		다양한 너	다양한 타자(타인, 타자, 삶의 방식)들이 있는 세계와 만나기 인간, 동식물, 기계, 균류, 지구와 상호작용하며, 내가 아닌 다른 것이 되기를 경험할 수 있음.	핸즈온 조각+도구
４		모두의 식탁	내가 만났던 친구를 생각하며 친구를 위한 음식을 준비하고 이야기하기	대형 테이블+카드패널
５	우리 함께 놀자	함께하는 기술	서로를 위한 놀이 : 서로 협력하여 공을 넣거나, 서로의 판단에 따라 물이 나오는 놀이, 상대방의 움직임을 따라 하는 놀이 등을 통해 함께 놀이하는 즐거움을 느낄 수 있음(협력)	협력 놀이 전시물
６		당신의 이웃	나를 둘러싼 공동체(가족, 학교, 이웃, 지역사회)를 생각해 보고, 사회적 딜레마(인권, 정의, 평화)에 대해 선택하기 (문제 해결)	전자석 패널 모니터+선택 버튼
７		다함께 놀이	개인의 활동이 전체에 영향을 주는 놀이구조물(연대)	순환시스템 +놀이구조물
８	어린이 미래 실험실	우리의 목소리	세상을 바꾼 어린이 활동가를 소개하고, AR 애플리케이션을 활용하여 환경에 대해 발언하기(발언)	태블릿+스크린
９		우리의 상상	미래에 대한 어린이와 연구자의 생각과 질문을 소개하고 관람객은 선택하며 참여할 수 있도록 하며 선택의 결과가 누적되어 화면에 보임	선택 인터페이스 +스크린

※ 연출의 방법은 예시이며 다양하고 창의적인 전시물 연출에 대한 제안 가능

※ 최소 3종 이상은 현대 미술작품을 활용하거나 현대미술작가와의 협업으로 진행

5. 요청사항

1) 공간 연출 방향

① 외부 환경과의 연결성, 개방성 확보를 위한 공간 디자인

② 채광 및 환기, 보안을 위한 방안 고려

③ 어린이의 공간 인지를 고려한 전시 동선의 흐름, 공간 구분을 위한 벽면 설계

④ 관람자 및 스태프(강사 등) 휴게 공간 확보

⑤ 촉지 안내판, 음성안내, 및 해설, 수어 영상 등 모두를 위한 정보의 제공 및 디스플레이, 동선 설계가 필요하며 특히 장애인 및 노약자, 아이 및 동반자의 관람을 고려

⑥ 스튜디오 공간에 관객석 및 수납공간 확보, 미디어 장비의 설비

2) 전시물 연출 방향

① 소리, 색, 촉감, 빛 등을 최대한 활용한 다중감각 체험전시물 구성

② 일부 체험물(3종 이내)은 현대 미술작가와 협업하거나 현대미술작품을 활용하여 진행

③ 관람객 스스로 탐구·참여 가능하고 신체·협동 활동 유도할 수 있는 체험방식 개발 및 연출

④ 기술 기반의 미래 사회에서의 미디어 리터러시를 높이는 체험물의 개발

⑤ 전시품 접근성 및 작품 정보 접근성에서 어린이를 비롯한 사회적 약자 모두의 참여 및 감상이 가능한 디자인 및 연출 필요

3) 전문인력 배치 및 활용

① 사업의 수행 과정에서 내외부 전문가의 자문을 통한 의견 수렴

② 미적 수월성을 위한 전문가, 협업 진행

(색채, 그래픽, 공간, 일러스트 등은 박물관과 협의 후 선정, 진행)

③ 기타 주제에 따른 공간조성, 전시구성 및 제작, 배치 등 일괄 진행하여 완성도를 높이고 책임성 있는 유지 보수 수행 필요

3		과업지침

□  기본지침

1. 기본 방향, 주제, 내용, 연출, 예산 등 충분히 숙지한 후 제안서 내용 및 발주기관과 추가로 협의한 사항을 토대로 설계 및 제작·설치에 임해야 한다.

2. 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 기준과 연계 검토한 후 수행한다.

3. 설계 및 제작·설치·실물 구매는 각 단계별로 발주기관이 승인한 관련 분야 전문가로부터 자문을 받고, 발주기관과 협의 후 시행한다.

4. 본 과업과 관련하여 건축, 전기, 통신, 소방, 기계, 조명 등 관련 분야 법규(건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신사업법 등)를 면밀히 검토하여 누락사항이 발생하지 않도록 하고 기존 설비와의 호환에 문제가 없도록 시공하여야 하며, 누락 발생 시 사업비 증액 없이 사업자가 보완·시공하여야 한다.

5. 전시체험물 제작에 사용되는 재료는 친환경 제품 사용으로 실내 공기질 관련법에 저촉되지 않아야 하며, 화재 예방을 고려하여 불연재, 난연재 사용을 원칙으로 하고 그렇지 않을 경우 방염처리 진행하며, 반드시 소방서 방염성능검사 성적서 제출하여야 한다.

6. 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 해야 하며, 설치 후에도 유지·보수·사후 관리가 쉽도록 설계하여야 한다. (누수, 방수, 균열 등 방지)

7. 사업수행 중 정책 변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주기관은 본 과업 일부 또는 전부를 중지하거나 과업 내용을 변경할 수 있으며 이에 따른 간접비의 지급은 없다.

8.	기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때는 발주기관의 해석에 따른다.

□  세부 지침

1. 전시 공간 연출

1) 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련 법 규정과 제시한 기준 이상으로 설계함, 다만, 기준이 명확하지 않거나 서로 다른 경우에는 강화된 기준을 따르고 발주기관의 승인을 받은 후 설계해야 한다.

2) 박물관 출입구 및 이동 통로의 폭은 관람객의 이동이 원활히 이루어지도록 조성하여야 한다.

3) 어린이, 노약자, 장애인 등을 위한 시설은 관련 법규의 기준에 따라 설치하여 관람 편의성을 높여야 한다.

4) 내부 시설 모든 자재는 소방법 관련 법규 기준에 따라 구축하여야 한다.

5) 피난 동선 확보 및 진출입로의 접근이 쉽게 하며, 소방 사인물을 적소에 설치 및 옮기어 진출입 및 피난이 쉽게 한다.

6) 영상 및 음향 장비, 컨트롤 박스 등 제반 설비는 유지관리가 쉽게 제작한다.

7) 각종 점검구 및 출입구는 마스터키를 사용하여 관리가 쉽게 한다.

8) 사용되는 자재는 포름알데히드 및 휘발성 유기화합물(VOC)이 검출되지 않는 친환경자재를 사용해야 한다.

9) 설치 진행 전 자재 운반 시 손상 우려가 있는 엘리베이터, 램프, 전시장 바닥은 합판이나 PVC 재료로 견고하게 보양 후 작업을 진행해야 한다.

10) 설치 진행 전 해당 현장 내 바닥, 벽체 손상 우려가 있을 시 해당 면은 보양재, 비닐 보양 후 작업을 진행해야 한다.

11) 미세먼지, 나무 톱밥 등의 외부 유출을 차단하기 위하여 작업 구역 내 비닐 막을 설치하고 집진기를 설치하여 오염물은 원천 처리해야 한다.

12) 또한 설치 기간 중 청소를 수시로 진행하여 설치 구역 내 청결 및 오염물 외부 유출을 방지해야 한다.

13) 공사 과정에서 발생하는 폐기물은 사업자가 전적으로 책임지고 반출하여야 하며 준공 시에는 개관 대비 준공 청소를 하여야 한다.

14) 작업 시 소음 및 분진은 최소화하여야 하며 발생이 우려되는 경우, 관람객이나 주변 환경 보호 대책을 강구하고 안내 사인을 설치해야 한다.

15) 현재 개편 대상 공간인 박물관 3층은 별도의 화물엘리베이터가 연결되어 있지 않기 때문에, 자재 및 전시물 반입 또는 반출시 별도의 고소 장비를 통해 반입이 필요할 수 있으며, 이에 대한 비용 일체는 사업이행자가 부담한다.

2. 전시물 제작

1) 전시물 설계는 과업지시서의 전시계획안을 기본으로 수행하되, 전시물 일부 연출 방법 및 콘텐츠에 대한 변경 제안을 할 수 있으며 추가 전시물에 대한 제안도 할 수 있다.

2) 작품을 제작, 설치하는 현대미술 작가는 해당 분야에서 5년 이상 활동한 경력이 있거나 국공립미술관 전시에 1회 이상 참여한 경력이 있는 작가로서 전시 주제 및 의도를 충분히 이해하고 반영해야 한다. 또한 작가 선정은 박물관측과 충분한 협의를 거쳐야 한다.

3) 전시물 및 전시 보조물 제작 시 현대미술 작품을 활용할 경우 작가(예술가)의 의도 및 요구사항을 반영하고 작가와 긴밀히 협업한다.

4) 어린이의 안전을 최우선으로 하여 「어린이놀이시설 안전관리법」, 「어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준」, 「어린이제품안전특별법」, 「어린이제품 공통안전기준」 등 관련 법령 및 규칙을 면밀히 검토하여 설계해야 함(모서리 라운딩 처리, 충격 방지시설 등)

5) 전시물은 시공 후에도 견고하고 안전하면서 설치와 분해가 쉬운 조립식으로 현장 설치 작업을 최소화하고, 전시 교체의 편의성과 재활용 가능성을 고려하여 전시물을 설계·제작 및 설치해야 한다.

6) 전시 콘텐츠는 변경 및 업데이트가 쉽게 설계하고, 관리 계획을 포함해야 한다.

7) 추락, 파손, 안전사고 등 위험 요소가 존재하는 전시·체험물의 경우 종합적인 안전대책 및 운영관리 계획을 포함하여 제시해야 한다.

8) 성능의 안전·안정성 및 중장기적 유지관리 측면의 호환성을 고려하여 모든 시설, 장비, 자재는 성능과 안전도가 검증된 KS 표시품과 형식 승인품 및 그 이상인 제품을 사용해야 하며, KS 표시품이 없을 경우 시중 최고품으로 사전 승인 후 사용해야 한다.

9) 각 전시물은 유지 보관이 쉽게 제작하되 점검구가 필요한 경우에는 눈에 띄지 않는 곳에 두도록 한다.

10) 작동부는 부품 교환 점검 등 보수작업이 쉽게 구조를 단일화하여야 하며, 나사류 및 잠금장치도 가능한 단일 규격을 사용하여야 한다.

11) 모든 전시물은 정밀성과 내구성이 강한 소재를 사용하여 제작하며, 발주기관 승인을 받은 제작도면에 따라 제작하여야 한다.

12) 시범 운영 단계에서 고장 및 수리(하자 이행 기간 중 같은 부품 및 부위 2회 이상)가 발생하는 시설은 해결 방안을 제시하고, 발주기관 요구 시 이를 보완하여 설치하여야 하며 그 비용은 사업자가 부담하여야 한다.

13) 하자보수 기간은 준공 후 2년으로 하며, 납품일로부터 2년의 이행(하자) 보증보험증권을 제출하여야 한다.

14) 원활한 어린이박물관 운영을 위하여 발주기관의 요청이 있을 경우는 하자보증기간이 지난 이후라도 객관적 자료에 근거한 유상의 하자보수 계약을 이행하여야 한다.

3. 색채 및 디자인 연출

1) 전시에 맞는 디자인 및 일러스트, 색채에 대한 별도 기획안을 수립한다.

2) 전시실 내 콘텐츠 사용 안내 등 전시와 통일성 있는 사인물 제작·설치한다.

3) 색채/그래픽/공간/일러스트 디지이너 등은 박물관과 협의 후 선정한다.

4) 이미지 사용 및 내용 등이 기존의 지적 재산권을 침해하지 않는 범위 안에서 제작하여야 하고, 관련 증빙서류 제출한다.

5) 사인물의 내용은 분야별 전문가의 의견 및 감수를 거쳐 발주기관의 승인을 받은 후 제작한다.

6) 문안은 외국인 관람객의 편의를 위해 2개 국어(국문, 영문) 이상으로 제작한다.

7) 콘텐츠 및 디자인 계획수립 시 어린이 관련 공간 건축가, 작가, 디자이너 등의 참여 필요하다.

4. 시스템 설비(영상·음향 포함)

1) 체험전시물 구성 시 제어가 용이하도록 시스템을 구축하고, 수시로 업그레이드할 수 있도록 컨트롤러 도입한다.

2) 음향은 콘텐츠 체험에 최적화되도록 하고 주변 타 콘텐츠가 있는 경우 간섭이 없도록 설치 장소, 지향 각도, 음량을 고려하여 설계한다.

3) 기기의 모든 케이블은 신호 결손이 없도록 완벽히 결선이 가능한 상태로 제작되어야 한다.

4) 콘텐츠 재생을 위한 외부 디스플레이와는 HDMI 단자를 통해 연결되어 영상과 음성의 동시 재생이 가능하여야 한다.

5) 각종 장비는 파손 및 분실 대비 및 위생 관리 설비를 갖추어야 한다.

6) 누구나 쉽게 조작할 수 있도록 간편화하여야 하며, 납품 후 장비별 세팅법, 유지보수법 등이 담긴 사용설명서를 제출한다.

7) 개인용, 탑승형 장비는 모든 연령층이 이용할 수 있도록 유연성 있는 재료를 사용한다.

8) 전시실 내 음향이 외부 공간으로 나가지 않도록 필요할 경우 방음설계(방음벽, 방음패널, 출입문 등) 실시한다.

5. 유지관리 매뉴얼 작성

1) 전시물의 작동, 효율적인 유지보수, 관리·운영을 위한 매뉴얼을 작성하고, 필요한 비용을 산정하여 기술하여야 한다.

2) 필요한 인력 및 장비를 상세히 기술하되, 긴급사항 발생 시 응급조치가 가능하도록 작성하여야 하며 유지보수(교체·정비) 비용, 주기 등을 포함한 관리 방안을 함께 제시하여야 한다.

6. 중대재해 처벌 등에 관한 법률에 따른 사항(안내)

1) 계약상대자는 계약체결 이후 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 」 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건에 관한 의무를 준수하여야 하며, 입찰자는 어린이 가족이 이용하는 공간 특수성에 맞는 안전․보건 확보 조치 철저, 현장 여건, 과업 내용, 「산업안전보건법」에 따른 산업안전보건관리비 등 안전 관련 법정 경비 반영 여부 및 적용 기준 등을 규격서, 내역서 등에 반드시 반영하여야 한다.

2) 발주기관은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제4조 제9호에 따라 계약자가 동 법 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건에 관한 의무를 준수하는지 평가·점검할 수 있으며, 계약자는 발주기관이 평가·점검을 실시하는 경우 이에 협조하여야 한다.

3) 계약상대자가 안전·보건 확보에 필요한 조치를 소홀히 하거나, 이행 여부에 대한 점검 결과 보완 및 조치 등이 필요한 경우 수요기관은 계약상대자에게 이에 대한 시정을 요구할 수 있다.

4) 계약상대자는 공사수행에 있어서 안전 관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우 즉시 발주기관과 감독관에게 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 하고, 공사 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업자 및 하수급자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 져야 한다.

5) 계약상대자는 안전관리책임자를 임명하여 감독관을 경유하여 발주기관에 보고하고, 임명된 안전관리 책임자를 제작·설치 현장에 상주시켜야 하며 안전관리 책임자 상주 및 안전관리가 소홀할 경우 감독관 또는 발주기관에서 제작·설치의 중지를 지시할 수 있다.

7. 기타

1) 발주기관은 중요한 사안의 결정을 위하여 회의를 소집하거나 전문가의 조언을 듣도록 사업이행자에게 요구할 수 있고, 사업이행자는 이에 대한 자문 결과를 보고서로 제출하도록 한다.

2) 사업이행자는 창작된 모든 성과품과 최종산출물 및 자료의 저작재산권(2차적 저작물 작성권 포함)을 발주처에 양도하며, 발주처의 허락 없이 임의로 이를 소유하거나 복사 또는 외부로 유출해서는 안 된다.

3) 사업이행자는 창작된 산출물 및 자료에 대한 저작권, 초상권, 소유권 등으로 분쟁이 발생하지 않도록 사전에 해결해야 하며 분쟁이 발생 시 사업이행자가 모든 법적 책임을 진다.

4) 하자보증·무상보수 기간은 납품일로부터 1년으로 하며 해당 기간 중 발생하는 장애, 오류, 하자 등 발주처의 요구 시 언제라도 무상으로 하자보수 및 기술지원 실시한다.

5) 원활한 어린이박물관 운영을 위하여 발주기관의 요청이 있을 경우는 하자보증기간이 지난 이후라도 객관적 자료에 근거한 유상의 하자보수 계약을 이행하여야 한다.

6) 경기도어린이박물관은 휴관일(매주 월요일) 제외 상시 운영하는 기관이므로 현장 공사는 최소화하고, 관람객의 이동에 불편을 주지 않는 최선의 현장 보완 작업 후 공사를 진행한다. 현장 출입 방법과 기간은 반드시 사전에 협의하고 발주처의 통제에 따르도록 한다.

7) 사업 진행 중 필요한 각종 심의, 허가, 협의 사항 등에 수반되는 설계 및 자료는 발주처가 필요로 할 시 적기에 제공하고 이에 수반되는 비용은 사업이행자가 부담하도록 한다.

8) 사업이행자는 사업을 수행하면서 요구되는 관련 법규의 준수와 법령을 성실히 이행하고 관련 법령 등의 저촉 및 미비로 발생하는 모든 피해 상황에 대하여 책임져야 한다.

9) 사업이행자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무 내용에 대해 제삼자에게 누설해서는 안 되며 발주처가 요구하는 보안 사항을 철저히 준수하여야 한다.

10) 본 지침에서 정하지 않은 사항에 대해서는 관련 법률에 따르며 본 지침의 해석상 이견이 있을 시 발주처의 해석에 따른다.

4		사업수행 조건

1. 사업수행에 필요한 장비 일체는 사업자가 자체적으로 확보하여 수행하여야 한다.

2. 사업자가 제출한 설계도서상 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장을 초래하였을 때는 사업자가 이에 대한 책임을 져야 한다.

3. 과업 수행 업무보고는 아래와 같이 수행하여야 한다.

1) 과업 수행해 보고

① 착수보고: 사업자는 계약체결 후 10일 이내에 본 과업에 착수하여야 하며, 착수 시 경기도어린이박물관에 착수계를 제출하고, 착수보고 PT를 수행한다.

② 중간보고: 기본설계의 완료시점, 실시설계의 중간시점과 완료시점 등 1회 이상 중간보고와 자문회의를 하여야 한다.

③ 수시보고: 발주자의 요청이 있거나 사업자가 주요결정사항에 있어 필요한 경우에 수시보고 및 자문회의를 하여야 한다.

④ 최종보고: 사업자는 준공일 20일 전까지 과업 수행결과에 대하여 발주기관에 최종 보고한다.

2) 업무보고

① 주간공정보고: 사업자는 주간업무보고서를 매주 정해진 요일에 발주기관(감독관)에게 제출하여야 한다.

② 월간공정보고: 사업자는 본 공사에 대한 월간공정보고서를 매월 지정일에 발주기관(감독관)에게 제출하여야 한다.

③ 예산지출 계획 및 실적 내용 월간보고

- 사업내역 변경 시에는 3개 기관(업체) 이상의 견적서를 첨부하여 수정된 사업 내역서를 보고·제출하여야 한다.

- 매월 예산지출 계획과 실적을 발주기관에 보고·제출하여야 한다.

- 사업기간 종료 1개월 전 사업내역과 예산지출 실적을 종합 보고하여야 함

- 사업내용 변경 시에는 변경 계약을 하여야 한다.

- 사업완료 후 사업자는 집행내역에 대한 증빙을 발주기관에 제출하여야 하고, 제안요청서 또는 산출내역서상 각 항목 중 미집행한 사항에 대하여 대금지급 시 이를 감하고 지급한다.

4. 총괄책임자 및 공정별 책임자는 제작·설치 전 과정을 전담하여 관리하여야 하며, 불가피한 사유가 있을 경우 발주기관과 협의하여 책임자를 변경할 수 있다.

5. 사업자는 본 제안요청서에 따라 제작 설계를 수행하고, 성과품(도면, 시방서, 내역서 등) 납품은 계약서에 정한 기일에 완료하여야 한다.

6. 사업자는 실행 전 단계에 발주기관이 구성한 자문위원(3인 이내)의 의견을 청취하고 이를 최대한 반영한다. 또한 전시품 제작 단계에는 어린이 대상 디자인 전문가를 포함해야 한다.

7. 사업수행 중 또는 준공 후에라도 사업 목적물이 본 제안요청서 및 계약문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되면 발주기관이 보완을 지시할 수 있으며, 소요되는 모든 경비는 사업자가 부담하여 보완·수정하여야 한다.

8. 본 사업에 필요한 관련 인·허가를 받거나 검사를 받아야 할 경우 이에 대한 처리 및 소요 비용은 사업자가 부담하여야 한다.

9. 본 사업수행과 관련된 제안서 작성 및 설계비 등 제반 소요 비용은 사업자가 부담하여야 한다.

5		납품 목록

연번	구 분	규 격	수량	비 고
1	설계 도면	A3	3부	도면(평면도, 전시품별 최종 설계도면, 전기 배선도 등) 도면의 경우, CAD 및 PDF 파일 2가지 형태로 제출
2	제작설명서	A4	3부	진행 공정 및 준공 사진 포함
3	산출 내역서	A4	3부
4	제작 시방서	A4	3부
5	공정표	A4	3부
6	운영 매뉴얼	A4	3부	최종 인쇄용 파일 외
6	성과품 데이터	USB 등 저장매체	2식	설계도면, 사인물, 영상 자료, 그래픽디자인 파일 등 원본 및 소스 그래픽 디자인 파일과 일러스트의 경우, 실행파일과 PDF 파일 2가지 형태로 제출
7	기타 서류	A4	1부	원고, 각종 회의 및 감수 또는 자문록, 인허가 증빙자료(저작권 사용 허가, 안전필증 등) 및 사업 수행 중 산출된 모든 자료 일체 등 발주기관이 요구하는 사항

1. 납품목록

※ 상기 모든 문서 자료 일체를 저장매체(HDD)에 담아 3식 제출

Ⅲ. 제안서 작성 및 제출

1		제출도서의 종류 및 규격

1. 제안 업체는 1개의 기술제안서를 제출할 수 있고, 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 수정·추가·대체할 수 없다.

2. 제안 업체 특정할 수 있는 부분 삭제

-  제안서 본문에 제안업체명 또는 참가자를 특정할 수 있는 표기는 허용하지 않으며, 이를 위반할 경우에는 평가에서 제외하거나 감점 처리할 수 있다.

3. 사업수행 능력평가서(정량적 평가자료)와 기술제안서(정성적 평가자료)를 각각 분리하여 제출한다.

4. 제출된 서류의 오류, 누락 등으로 인한 평가 불이익에 대한 책임은 제안업체에 있다.

5. 제출한 입찰서류 및 제안서는 일체 반환하지 않고, 제안서 작성 및 제출과 관련된 일체 비용은 제안 업체가 부담한다.

6. 제안 업체는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설할 수 없으며, 이를 위반하여 발생한 문제는 제안 업체가 책임져야 한다.

7. 제출서류 목록

구분	제출 서류	관련 서식	비고
입찰 참가 등록 서류	①입찰등록서류 표지	별지 제1호
	②입찰참가신청서	별지 제2호
	③위 임 장	별지 제3호
	④서 약 서	별지 제4호
	⑤확 인 서	별지 제5호
	⑥보안서약서	별지 제6호
	⑦개인정보제공동의서	별지 제7호
	⑧청렴계약이행서약서	별지 제8호
	⑨안전보건관리 준수 서약서	별지 제9호
	⑩사업자등록 및 법인등기부등본	없음
	⑪인감증명서(법인/개인)	없음
	⑫경쟁입찰참가자격등록증	없음
	⑬직접생산확인증명서	없음
사업수행 능력평가서 (정량평가 자료)	①사업수행능력평가서 표지	별지 제10호	▪ 규격 : A4(210㎜ × 297㎜) ▪ 표지 : 백색아트지, 서식 제13호 ▪ 내지 : 백상지 ▪ 제본 및 칼라 : 왼쪽 제본 또는 스프링 / 단면 칼라 ▪ 세로로 작성
	②제안업체 일반현황 및 연혁	별지 제11호
	③조직 및 인력현황	별지 제12호
	④최근 3년간 사업 수행실적	별지 제13호
	⑤실적 증명서	별지 제14호
	⑥기술인력 보유 현황	별지 제15호
	⑦참여인력 현황	별지 제16호
	⑧참여인력 이력사항	별지 제17호
	⑨경영상태(재정상태 건실도)	별지 제18호
	⑩수행능력 자기평가표	별지 제19호
기술제안서 (정성평가 자료)	①기술제안서 표지	별지 제20호 제21호	▪ 규격 : A3(297㎜ × 420㎜) ▪ 표지 : 백색아트지, 서식 제6호 ▪ 내지 : 백상지 ▪ 제본 및 칼라 : 왼쪽 제본 또는 스프링 / 단면 칼라 ▪ 가로로 작성 ▪20매내외
	②제안서 본문 ※ 제안서 작성 방법 참조	제안요청서, 과업지시서 참조
가격제안서 (밀봉)	①가격제안서 표지	별지 제22호
	②가격제안서(산출내역서 별도)	별지 제23호
	③입찰참가 제안서 제출증, 접수증	별지 제24호
공동수급시 제출 서류	①공동수급표준협정서	별지 제26호
	②공동수급체 합의각서	별지 제27호
	③공동수급회사조직도	별지 제28호
발표자료 (USB)	- PPT로 작성, PDF로 변환 제출 - USB 표면에 사업명, 업체명 표기		▪ 제안서 내용을 중심으로 20분 이내 발표할 수 있도록 작성 ※ 블라인드 평가로 본문에는 업체명 표기 일체 금지

2		제출도서의 작성방법 및 작성목차 (권장사항)

사업 수행능력평가서

1) 제출부수 : 1부 , 원본

2) 규    격 : A4 규격용지, 세로로 작성, 좌편철 풀 제본, 단면 칼라 인쇄

3) 표    지 : 【별지 제10호】에 따라 작성

4) 쪽 번호는 하단 중앙에 표기하고, 표지 및 목차, 간지, 증빙서류는 쪽에서 제외한다.

5) 사업수행능력 평가서에 기입된 일반현황 및 연혁, 최근 3년간 사업수행실적, 근무인력 현황, 신용평가 등급 확인서 등을 아래 목차에 따라 명확하고 상세하게 기입한다.

5) 세부내용

목차	세부내용	비고
표지		별지 제10호
1. 자체평가표	․ 사업수행능력 자기평가표(관련 증빙서류 필히 첨부)	별지 제19호
2. 일반현황 및 연혁	․ 제안업체 일반현황 및 연혁을 명료하게 기술	별지 제11호
3. 사업수행실적	․ 공고일 기준 최근 3년간 공공기관에서 발주한 “당해사업”과 유사한 실적에 한하여 작성 ․ 실적증명서: 해당기관의 확인을 받아 제출	별지 제13, 14호
4. 참여인력	․ 사업 수행조직 및 인원현황 기술 ․ 기술인력 보유현황 작성 및 참여인력 요약	별지 제15, 16, 17호
5. 재정상태 건실도	․ 제안업체에 대한 신용평가 등급 또는 기업신용평가등급 평가 결과 ※ 관련 증빙서류 필히 첨부	별지 18호

2. 기술제안서

1) 제출부수 : 10부(업체명 미표기 9부, 업체 표기 1부)

2) 규    격 : A3 규격용지, 단면 칼라 인쇄

3) 분    량 : 총 20매 이내(표지 및 목차, 간지 쪽수 제외)

4) 내    용 : 과업지시서의 내용이 누락되지 않도록 기술

5) 기술제안서의 목차는 다음의 순서를 권고함.(서체 및 크기는 별도기준없음)

항 목	주 요 내 용	비고
제안개요	1. 사업개요
공간 계획	1. 전시 공간 계획 - 전시 기본 구성 및 설계 방향 2. 전시 공간 구성 - 동선 계획 및 배치도 3. 색채 계획, 재료 마감 계획
전시 연출	1. 전시 연출 의도 및 방향 - 전시 연출의 차별점 및 특징 2. 전시물 계획 - 전시물별 상세 연출 계획 3. 전시 그래픽 계획 - 전시 그래픽(패널 등) 계획
추진 계획	1. 사업 추진일정 계획 - 세부 과정별 추진일정 구체적 제시 2. 사업수행조직 및 업무분장 3. 분야별 투입인력계획 - 참여인원 및 기술등급 표기
관리 운영 계획	1. 사후관리계획(유지보수 및 지원방안 등)

3. 발표자료

1) 제출부수 : USB 1매 제출(케이스에 업체명 기재 제출)

2) 제    작 : 파워포인트 프로그램으로 제작 저장(PDF 파일로도 제출)

3) 발표시간 : 20분 내외 * 질의응답 10분은 별도 (접수 상황에 따라 발표시간은 조정 예정)

4) 발표방법 : 제안사의 사업 총괄책임자가 직접 발표

※ 발표 내용에 동영상 및 음향 사용 금지, 업체를 알 수 있는 표식 금지

※ 업체별 설명 순서는 제안서 접수 순으로 함. 설명 시간은 입찰참가 등록상황에 따라 일부 조정될 수 있으며 제안 설명 불참업체는 입찰참가 등록을 취소

3		제안서 작성 지침

1. 본 사업을 명확하게 이해하고 사업의 목적, 범위, 요구사항 등 제안의 내용을 구체적으로 기술해야 한다.

2. 제안서의 모든 내용은 현실적으로 제작·설치 및 실행이 가능하여야 한다.

3. 제시된 목차, 작성 지침 등을 준용하여 붙임의 서식에 따라 작성해야 한다.

4. 제시된 목차를 기준으로 하되 내용을 추가하거나 별첨할 수 있다.

5. 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여야 하며, “~를 제공할 수 있다.”, “~이 가능하다.”, “~를 고려하고 있다.” 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 판단한다.

6. 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 명확하게 표기하여야 한다.

7. 제안업체는 본 제안요청과 관련한 모든 문서를 대외비로 취급하여야 하며, 제안 업체 관계자 이외의 인원에 대해서는 공개하지 않아야 한다.

8. 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 한다.

9. 응모서류는 한글 및 아라비아숫자 표기, 미터법으로 작성한다.

10. 모든 제안 서류의 작성은 한글표기를 원칙으로 하며, 부득이 전문용어를 사용하는 경우 한글로 용어 해설을 표기한다.

11. 제안서 작성 기준 : 여백 상20, 하15/ 좌·우20 /크기 : 12~20point /줄간격 : 180% 외에 별도의 제한을 두지 않으며 위의 기준도 변경할 수 있다.

4		제안서 효력 및 유의사항

1. 제안요청서의 성격

1) 본 제안요청서 내용은 발주기관과 제안사(계약체결 이후에는 ‘사업자’)간의 적법한 협의 또는 발주기관의 내부 사정에 따라 수정․변경될 수 있다.

2). 본 제안요청서의 내용은 사업자 선정에 필요한 최소한의 요구사항을 기술한 것이며, 제안서 작성 및 사업 추진에 따른 제반 사항 모두를 상세히 기술한 것은 아니다.

3). 비록 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 과업 범위에 포함된 것으로 간주한다.

4) 제안요청서에 대한 질의 답변 사항은 모든 제안자에게 동일한 효력을 가진다.

2. 제안서의 효력

1) 제안서에 명시된 내용은 별도의 협의가 없어도 이행의 의무가 있으며 발주처는 필요시 제안 업체에게 제안의 수정·보완·변경을 요청할 수 있고, 이에 따른 제안 내용은 제안서와 동일한 효력이 있다.

2) 제안서에 명시된 내용과 수정·보완·변경된 제안 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력이 있다.

3) 본 제안요청서는 과업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의하지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서 등에 기술되지 않은 사항이라도 과업에 반영할 수 있다.

4) 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없으며 사실과 일치하여야 한다.

3. 유의 사항

1) 제안자는 제출된 제안 서류에 대한 사실 여부 등의 책임을 지며, 발주처는 제안 내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있다.

2) 제안서의 내용을 객관적으로 입증 또는 설명하기 위해 꼭 필요한 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

3) 제안서의 모든 내용은 지적 재산권 관련 사항을 주의해서 작성하여야 하며, 지적재산권 관련 문제 발생 시에는 제안자가 책임을 진다.

4) 기술제안서 1부는 제출자의 상호 및 성명을 기재 날인한다.

5) 실적증명은 첨부 양식을 원칙으로 하되, 발급 후 1년 이내 것만 유효(입찰공고일 전일 기준)하며 모든 증빙자료를 발행 자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 한다.

6) 기술 인력 보유 현황에 기재된 기술자는 반드시 본 사업수행에 참가하여야 하며, 당해 사업에 참가하지 아니하는 경우 그 인원이 업체 선정의 중요한 요소인 경우에는 계약해제 또는 해지의 사유가 될 수 있다(단, 퇴직 질병 등의 사유로 부득이한 경우 미리 발주기관의 승인을 얻어 당초 구성원과 동등하거나 이상의 자격, 경력을 가진 자를 배치해야 함)

7) 본 제안요청서 및 계약 사항에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 경기도어린이박물관과 제안 업체와의 협의에 의해 결정하고, 협의가 이루어지지 않을 경우 경기도어린이박물관의 의견에 따른다.

8) 제안 결과에 따른 산출물의 소유권은 발주처에 귀속된다.

Ⅳ. 제안서 평가 및 계약

1		평가일정 및 방법

1. 제안서 평가

1) 관련근거

① 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조

② 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 행정안전부 예규 제283호 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준

2) 제안서 발표 및 평가

① 일    시: 2024년 11월 1(금) 14:00 ~ (제안서 접수 시 안내)

※ 심사 일정 등은 사정에 따라 변경 가능(제안서 접수 후 별도 통지)

② 장    소: 경기도어린이박물관 2층 강당

③ 제안설명: 30분(PPT발표 20분, 질의응답 10분) 이내

- 발표순서: 제안서 제출 순서에 따름

- 제안설명회 참여자는 발표자를 포함하여 2인 이내로 제한함.

- PPT설명에 따른 이동식 저장장치 당일 지참.

- 평가위원에게 제공하는 자료는 제안서로 대신함.

- 발표 내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 그 사유를 명확히 명기하여야 함.

■ 제안서 발표 시 발표자의 자격, 참가자 등

ㅇ 제안서 발표자는 반드시 제안사가 지정한 사업관리자(PM) 또는 분야별 책임자이어야 하며, 제안사 소속 임직원으로서 입찰공고일 전부터 제안서 평가일까지 계속해서 재직 중인 자이어야 함. 발표자인 사업관리자(PM) 또는 분야별 책임자는 사업종료 시까지 당해 사업 복무를 원칙으로 함

※ 발표자가 제안서에 명시된 사업관리자(PM) 또는 분야별 책임자가 아닐 경우에는 발표할 수 없으며, 사전에 녹화한 동영상 발표도 인정하지 아니함. 이 경우 기제출된 제안서로 서면으로만 평가함

※ 발표자 신분 확인[재직증명서, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 필수 지참]

ㅇ 발표 장소에는 2인 이내 인원만 입장할 수 있으며, 타 제안사의 발표를 청취할 수 없음

④ 제안서 평가위원회의 위원명단 및 평가 내용, 평가 결과 관계 서류는 공개하지 않음

3. 평가항목 및 세부 기준

1) 제안서 평가는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 평가항목 비중은 기술능력 평가 90%, 입찰가격 평가 10%로 함.

2) 기술능력평가는 정량적 평가와 정성적 평가로 구분하여 평가하며, 정량적 평가는 사업부서 담당자, 정성적 평가는 제안서 평가위원회의 심의를 통해 평가함.

3) 입찰가격평가는 입찰가격 평점 산식을 적용하여 평가함.

2		제안서 평가 항목 및 기준

구분			평가항목	배점
기술 능력 평가 (90)	정량적 평가 (사업수행능력평가) (20)	경영상태	• 신용평가등급에 의한 평가	5
		수행실적	• 관련 분야 사업 수행 실적 -공고일 기준 최근 3년간 사업 수행 실적	5
		수행인력 보유현황	• 본 사업 수행 참여인력 현황 - 입찰 공고일 기준 사업 수행 인력보유 현황	5
		부정당업자 제재처분	• 3년 이내 부정당업자 제재 처분	5
	정성적 평 가 (기술제안서) (70)	사업이해도	• 사업 목적(방향, 내용)에 대한 이해도	10
		공간 계획	• 공간 설계의 우수성 1. 전시 공간 계획 - 전시 기본 구성 및 설계 방향 2. 전시 공간 구성 - 동선 계획 및 배치도 3. 디자인 우수성 및 재료 마감 계획	20
		전시 연출	• 전시 연출의 우수성 1. 전시 연출 의도 및 방향 - 전시 연출의 차별점 및 특징 2. 디자인 및 재료 마감 계획 3. 전시물 연출 계획 - 체험 전시물로서의 내구성 및 안정성 - 전시품의 예술성, 현대 작가와의 협업성 - 전시물 제작 실현성, 다양성, 기술적 우수성 - 대상자 및 운영 상황을 고려한 설계 전문성 4 전시 그래픽 계획 - 전시 그래픽(패널 등) 디자인의 우수성	30
		수행능력 및 관리운영계획	• 수행 능력 및 계획의 현실성 1. 사업 추진 일정 계획 - 세부 과정별 추진 일정 구체적 제시 2. 사업수행조직 및 업무 분담 3. 분야별 투입 인력계획 - 참여 인원 및 기술 등급 표기 4 사후관리계획(유지보수 및 지원방안 등)	10
가격평가(10)			• 가격평가 평점산식	10
합 계				100

1.  기술능력평가(90점)

1) 사업수행능력 평가 (정량적평가, 20점)

① 경영상태(5점)

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평점
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.0
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3.0
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2.0

■ 경영상태는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제5조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용 평가등급이나 기업 신용평가 등급으로 평가함

■ 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급 평가 결과가 2개 이상인 경우 입찰참가자가 선택하여 제출함

■ 신용평가등급은 제안서 제출 마감일까지 평가한 것으로서 유효기간 내에 있는 것이어야 하며(유효기간 만료일이 제안서 제출 마감일인 경우도 인정), 신용평가 등급확인서를 제출하지 않은 경우에는 “0”점으로 적용하여 평가함

■ 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하며 합병 후의 새로운 신용평가 등급이 없는 경우에는 합병 대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사함

② 수행실적(5점)

평가 항목	평가요소	배점	평가방법
			기준		평점
사업 수행 실적	당해 사업과 같거나 유사한 사업에 대한 누계 실적(최근 3년간 기준, 부가세 포함) *단일건당 200백만원 이상	5	A. B. C. D.	6건이상 4-5건 2-3건 1건 이하 ※ 사업비 : 200백만원	5.0 4.0 3.0 2.0

※ 해당 사업 규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 수행실적(금액 기준) 건수

■ 실적인정범위 : 당해 사업과 같거나 유사한 실적은 국가, 지방자치단체, 공공기관에서 발주하여 준공한 전시관, 박물관, 미술관, 과학관, 체험관의 전시가 포함된 공간 연출 제작ㆍ설치 실적의 합계

* 단순 인테리어 사업은 배제, 박람회 • 홍보관 및 학교 시설물 설치 사업은 배제, 일회의 행사성이나 야외 전시물 제작 설치는 포함하지 않음) 예) 물 홍보관, 학교 교육실, 급식실, 학습관 체험실 조성 등

* 기성실적 인정하지 않고 준공 또는 납품 완료된 것만 인정함

■ 유사 사업 실적 인정 여부는 전적으로 발주처의 권한이며, 발주처는 판단에 참고하기 위해 관련 서류의 추가 제출을 요구할 수 있음

■ 제안업체는 수행실적 평가를 위하여 사업 수행 실적(별지 제13호)과 사업 실적 증명서(별지 제14호) 등을 제출하여야 함

* 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부 장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서 ※ 사본의 경우 사실과 상위 없음 확인 날인 필

* 실적증명서는 발급 후 1년 이내의 것만 유효함(입찰공고일 기준)

③ 사업 수행 가능 인력 보유 현황 (5점)

분야	평점	기준 및 배점
인력 보유현황	5	6인이상	5인	4인	3인	2인 이하
		5.0	4.0	3.0	2.0	1.0

■ 공고일 이전 3개월 이상 재직자에 한하여 평가함 (4대보험 가입증명서 제출수)

■ 본 업체에 재직하고 있으면서, 실제로 본 사업에 투입할 직원으로 평가

■ 증빙자료(재직증명서, 경력증명서, 자격증 사본, 4대 보험 가입증명서 등)를 제출하여야 하며, 미제출한 자는 평가에서 제외됨.

④ 부정당업자 제재(5점)

분야	평점	기준 및 배점
부정당업자 제재	5	해당없음	해당있음
		5.0	0

■ 공고일 기준 최근 3년 이내 관련 법령(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률)에 따라 부정당업자 제재처분, 입찰 참가제한 및 영업정지를 받은 사실 여부

2) 기술능력평가 (정성적 평가, 70점)

① 정성적 평가는 위원별 합계점수 중 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 산정한다.

② 단, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우 하나만 제외한다.

2. 입찰가격 평가(10점)

1) 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 행정안전부 예규 제283호 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준의 입찰가격 평점산식 준용한다.

3		심사결과 공지 및 처리

1. 협상적격자 선정 및 통지

1) 제안서 평가결과 최종 합산점수가 85점 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

2) 협상순서는 협상적격자를 대상으로 합산점수의 고득점순에 따라 결정하며, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가(정성적 평가) 점수가 높은 제안자를 선순위로 하며, 기술능력 평가(정성적 평가)점수도 동일한 경우에는 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제15조의 규정에 의거 전자조달시스템을 통한 자동 추첨방식을 이용하여 정한다.

※ 합산점수가 85점 이상인 자가 없을 시에는 재공고

3) 협상적격자 및 협상 순위가 결정된 경우에는 협상적격자에게 협상 순위와 일정을 통보하고, 미선정 업체에 대한 통보는 생략한다.

2. 실격 처리

1) 제안업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

2) 제안서 및 기타 제출된 제반 서류에 허위 사실을 기재한 경우

3) 평가 과정 등에 정당한 사유 없이 이의를 제기할 때

4) 평가위원회에서 제안서가 실격이라고 의결한 경우

4		협상 및 계약의 체결

1. 협상 및 계약체결

1) 협상절차

① 결정된 협상 순위에 따라 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상 적격자와 협상을 실시하지 않는다.

② 단, 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상 적격자와 협상을 실시한다.

③ 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고 입찰 또는 새로운 입찰에 부칠 수 있다.

2) 협상진행

① 제안서 협상

- 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행 방법, 이행 일정 등을 대상으로 협상을 실시하며, 협상을 통해 제안서 내용 일부를 조정할 수 있다.

② 가격협상

- 가격협상시 기준가격은 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우 예정가격) 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 정한다.

- 협상대상자가 제안한 내용을 가감 조정하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 해당 사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우 예정가격) 안의 범위에서 조정하여 계약 금액을 결정할 수 있다.

3) 협상기간: 협상 개시를 통보한 날로부터 15일 이내로 함.(필요시 조정 가능)

4) 협상결과 통보: 협상 성립시 그 결과를 당해 협상대상자에게 서면으로 통한다.

5) 계약체결 및 이행

① 협상 성립 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약을 체결한다.

② 계약의 체결 및 이행에 관하여서는 서면 통보한 협상 결과와 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ․ 시행령 ․ 시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

2. 기타 사항

1) 과업 수행 인원

① 사업총괄 책임자 및 과업 수행 인원에 관련된 사항은 반드시 포함되어야 하고, 사업 종료일까지 구성인원의 변경이 없도록 한다. 계약 성립 후 이 사항을 변경하고자 할 때는 기존 과업 수행 인원과 동등하거나 그 이상의 자격 및 경력 등을 갖추어 사전에 발주기관의 허락을 받아야 한다. 이를 위반할 시에는 계약 해지 등의 사유가 될 수 있다.

② 계약 성립 후, 발주기관이 판단하여 과업 수행에 지장을 초래하는 사업총괄 책임자 및 수행 인원에 대한 변경 요청이 있을 시 사업자는 이에 응해야 한다.

2) 유의 사항

① 제안 업체는 본 사업과 관련하여 취득한 내용에 대하여 제 3자에게 누설하여서는 아니 되며, 발주처가 요구하는 보안 사항을 철저히 준수하여야 한다.

② 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

③ 발주처의 조치 또는 기타 불가항력 사유로 본 제안서의 일부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안 업체는 이의를 제기할 수 없다.

④ 제안요청 관련 타인의 지적재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 제안업체에게 모든 법적 책임이 있다.

3) 분쟁조정

① 제출된 제안서는 해당 업체의 권익 보호 차원에서 평가위원 및 업무담당자 외 제 3자에게 비공개를 원칙으로 한다.

② 평가위원 평가에 대하여 이의를 제기할 수 없으며 평가 내용은 비공개로 하며, 평가 결과에 대해 일체 이의를 제기할 수 없다.

③ 본 사업은 발주처의 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우 지시에 따라야 한다.

Ⅴ. 입찰 및 제안서 관련 서식

서식번호	서식명	비고
별지 제1호	입찰등록서류 표지	입찰 등록 서류
별지 제2호	입찰참가신청서
별지 제3호	위 임 장
별지 제4호	서 약 서
별지 제5호	확 인 서
별지 제6호	보안서약서
별지 제7호	개인정보제공동의서
별지 제8호	청렴계약이행서약서
별지 제9호	안전보건관리 준수 서약서
별지 제10호	사업수행능력평가(정량평가) 제안서 표지	기술능력 정 량 적 평가서류
별지 제11호	제안사 일반 현황 및 연혁
별지 제12호	조직 및 인력 현황
별지 제13호	최근 3년간 사업 수행실적
별지 제14호	실적증명서
별지 제15호	기술 인력 보유 현황
별지 제16호	참여 인력 현황
별지 제17호	참여 인력 이력 사항
별지 제18호	경영상태(재정상태 건실도)
별지 제19호	수행능력 자기평가표
별지 제20호	기술제안서(정성평가제안서) 표지	기술능력 정 성 적 평가서류
별지 제21호	기술제안서(제안서 발표자료) 표지
별지 제22호	가격제안평가 제출서류 표지	가격제안 제출서류
별지 제23호	가격제안서
별지 제24호	입찰참가 제안서 제출증, 접수증	기 타
별지 제25호	질의서	기타
별지 제26호	공동수급표준협정서(분담이행방식)	공동수급 시 제출 서류 관련 서식
별지 제27호	공동수급체 합의각서
별지 제28호	공동수급회사조직도
별지 제29호	현장설명회 참가신청서	기타

[별지 제1호 서식] 입찰등록서류 표지

경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작 설치

입찰제안 제출서류

업 체 명

[별지 제2호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 ※ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
입찰개요	입 찰 공 고	제 2024 – 호		입 찰 일 자	2024. . .
	입 찰 건 명	경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작 설치
입찰보증금	납부면제 및 지 급 확 약	· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다. 확약자 (인)
대 리 인 ㆍ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 재단의 제한경쟁 입찰에 참가하고자 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 기타 공고로 정한 서류 2024년 월 일 신 청 인 (인) (재)경기문화재단 대표이사 귀하

[별지 제3호 서식]

위  임  장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소속 직위		연 락 처	☎
				HP
경기문화재단에서 시행하는 <경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작 설치> 제안서 공모에 응모함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2024. . . 대 표 자 : (인) 대 리 인 : (인) (재)경기문화재단 대표이사 귀하
1. 지참서류 : 재직증명서, 신분증 2. 위임장에 사용하는 도장은 대표자의 인감과 같아야 함 3. 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[별지 제4호 서식]

서    약    서

업체명  :                          등록번호 :

주  소  :                          연 락 처 :

<경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작, 설치> 입찰 참가와 관련, 다음과 같이 서약합니다.

1. 당사는 본 사업의 목적과 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 숙지ㆍ인정한 후 본 제안서를 제출합니다.

2. 당사는 제안서 제출과 평가에 있어 귀 기관이 결정한 평가내용, 방법 및 평가 결과를 수용하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

3. 만약 제안서의 내용이 허위로 판명될 경우, 즉시 적격 대상 업체에서 제외될 뿐만 아니라 최종선정 후에도 무효로 처리되며, 이에 대하여 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

4. 사업자로 선정시, 본 제안서를 계약서의 일부로 하겠습니다.

5. 당사는 사업자 선정전까지 귀 기관의 추가 요청사항을 성실히 이행하고 본 사업의 제안요청서 규정을 준수할 것이며 제반 규정의 위반, 지시 및 지침 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2024년   월     일

서약자              (인)

(재)경기문화재단 대표이사 귀하

[별지 제5호 서식]

확    인    서

(입찰참가자격제한 및 징계사항)

본 업체는 최근 3년간 관계법령에 의거 입찰참가제한 및 부정당업자 제재 등 관계기관으로부터 징계 받은 사실이 없음을 확약하며, 계약체결 후라도 만약 위 사실에 대한 위배내용이 확인될 시 계약해지 및 이에 따른 불이익 사항에 대한 책임은 본 업체에 있음을 확인합니다.

2024년    월     일

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                 (인)

재단법인 경기문화재단 대표이사 귀하

※ 해당사항 있을 시 부정당 업체 제재사실 확인서 첨부

[별지 제6호 서식]

보 안 서 약 서
제안자	상호 또는 법인명칭		법인등록번호 (사업자등록번호)
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 (재)경기문화재단의 <경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치>에 제안서를 제출함에 있어 본 제안과 관련된 제반사항을 반드시 준수하고 보안유지에 최선을 다할 것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 모든 사항에 대하여 귀 기관의 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다. 2024. . . 서 약 자 (인) (재)경기문화재단 대표이사 귀하

[별지 제7호 서식]

개인정보 제공 동의서
성 명		주민등록번호	-
본인은 <경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치> 사업신청서 제출과 관련하여, 개인정보 보호법 제15조에 따라 본인 확인을 위한 개인정보 제공에 동의합니다. 년 월 일 동의인 : (서명 또는 인) 재단법인 경기문화재단 대표이사 귀하
【 수집하는 개인정보의 항목 】 ○ <2024년 경기도어린이박물관 3층 상설전시 설계 및 제작·설치> 입찰 관련 서류의 접수 및 처리를 위해 서류접수 시 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다. - 필수 항목 : 성명, 생년월일(주민번호), 주소, 전화번호, 학력 및 경력사항, 인적사항 증명서 등 【 개인정보 수집 목적 】 ○ 사업수행기관 선정 절차 이행 【 개인정보 보유 기간 】 ○ 정보 주체 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다. 가. 신청 관련 정보 - 보존기간 : 5년 - 보존사유 : 공공기록물관리법 보유기간 책정 기준표 의거, 각종 증명서 발급과 관련된 개인정보파일 나. 관련 법령에 의한 정보보유 사유 - 보존기간 : 영구 - 보존사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령에서 정한 소관 업무 수행에 필요
개인정보의 수집 및 이용목적에 동의하십니까? □ 동의함 □ 동의하지 않음

[별지 제8호 서식]

청렴계약 이행서약서

당사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 (재)경기문화재단에서 발주하는 『<경기도어린이박물관 상설전시 설계 및 전시물 제작·설치> 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 (재)경기문화재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며

ㅇ 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 (재)경기문화재단이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참여하지 않고

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰ㆍ계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 직원에게 직ㆍ간접적으로 금품ㆍ향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 입찰ㆍ낙찰ㆍ계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 (재)경기문화재단에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며

ㅇ 입찰 또는 낙찰자 결정과 관련하여 관계 직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 (재)경기문화재단에서 시행하는 입찰에 입찰 참가 자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 조치와 관련하여 당사가 (재)경기문화재단을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민ㆍ형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024.   .   .

서 약 자 :  업체명                           대표          □

(재)경기문화재단 대표이사 귀하

[별지 제9호 서식]

안전보건관리 준수 서약서

산업재해예방을 위하여 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

「산업안전보건법, 중대재해처벌법」등 관련 법규를 준수하겠습니다.

:예     (        )

:아니오 (        )

(업체명)는 본  <경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치> 사업을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰 참가자격 제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 안전보건관리 준수 서약서를 제출합니다.

2024.    .    .

주    소:

업 체 명:

대 표 자:             (인)

경기문화재단 대표이사 귀하

[별지 제10호 서식]

접수번호

경기도어린이박물관

3층 상설 전시 설계 및 제작·설치

사업수행능력평가

정량평가 제안서

업체명 표기 금지

[별지 제11호 서식]

제안사 일반현황 및 연혁

(단위 : 명, 건수)

업 체 명		대 표 자
사 업 분 야
소 재 지
전 화 번 호			사업자 등록번호
설립년도	년 월
홈페이지 주소

재정상황(2023년도) (단위 : 천원)	자 본 금		매 출 액	순 이 익	비 고
					* 추정
사업실적 (건수/천원)	계	2021년	2022년	2023년	비 고
주 요 연 혁
주요사업내용

[별지 제12호 서식]

조직 및 인력 현황

1. 제안업체 조직 및 인원 현황

2. 사업수행 조직 및 인원 현황(예시)

총 괄 책 임 자

○○○ 분야			○○○ 분야			○○○ 분야
분야별책임자 : 참여인력 :			분야별책임자 : 참여인력 :			분야별책임자 : 참여인력 :

※ 1. 분야별 책임자를 명시해야 한다.

2. 분야별 기술자는 등급 · 경력기간 순으로 기재한다.

3. 본 수행조직에 등록된 자는 반드시 사업에 투입되어야 한다.

4. 총괄책임자는 대표자가 위임하는 자를 한다.

5. 분야는 3개를 초과할 경우 추가할 수 있다.

[별지 제13호 서식]

최근 3년간 사업 수행실적

연번	사 업 명	사업기간	계약금액 (천원)	발주처	실적확인 가능한 발주처 전화번호
계

※ 기재 요령

1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 준공·완료된 건에 한함

2. 사업수행실적은 발주기관에서 제시한 사업 범위 및 기준 등이 조건에 부합하는 실적에 한함

[별지 제14호 서식]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지 (주 소)				전화번호
	사업자 등록번호 (주민등록번호)				제 출 처		(재)경기문화재단
	증명서용도		<경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치> 실적 증명용
	사업범위 및 기준(금액 등)
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦					100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적			비 고
					비율(%)	실적(원)
			∼
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2024년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 1. 1개 기관에 2건 이상의 실적이 있을 경우 각각 실적증명원을 발급받아 첨부하여야 함

2. 타 기관에서 발행하는 전산용 서식(실적증명원)도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

3. 실적은 입찰공고 시에 제시한 조건과 범위에 부합되는 것만 인정함

4. 금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함

5. 입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 완료한 실적만 기재(발주처 확인)

[별지 제15호 서식]

기술 인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고
실내건축 기 술 자
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○○
기타

※ 기술자의 구분은 ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 시행령 [별표2] 기준에 따르며, 공고일 기준 2개월 이전 입사한 자 명기

※ 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 등급순위별로 기재

※ 재직증명서, 자격증, 최종학교 졸업증명서, 경력증명서, 국민연금관리공단 가입 확인서 등 필요한 증명서류 첨부

※ 증명사본 첨부(입찰공고일 이전에 등록된 기술자만 인정함)

[별지 제16호 서식]

참여 인력 현황

분야별	성명	연령	전공	당해업체 재직기간	자격증	담당업무	참여율
〇〇부문
〇〇부문
〇〇부분
〇〇부문
〇〇부문
〇〇부분

※ 공고일 3개월 이전부터 당해 업체에 소속된 인력에 한함

※ 상시근로자 증빙서류 : 4대 보험 가입사실 확인서류(국민연금 사업장 가입자 명부 등) 첨부

※ 본 사업에 참여할 인력 전부를 기재하며, 참여 인력 각각의 증빙서류(4대보험 가입확인서) 등을 제출하지 않을시 수행인력 평가 점수는 0점 처리함

※ 당해 사업의 개인별 참여율 합계는 100%를 넘지 않도록 작성

[별지 제17호 서식]

참여인력 이력사항

성 명		소 속 회 사		직 책		연령
학 력	학교 전공			해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공			자 격 증

경 력
사 업 명	참여기간 (연월∼연월)	담당업무	발주처	비 고

※ 1. 학력은 최종 학력만 기재

2. 재직증명서, 자격증 사본 등 첨부

[별지 제18호 서식]

경영상태(재정상태 건실도)

- 기업신용평가등급 확인서 첨부

※ 입찰공고일 전일 기준으로 가장 최근에 평가한 유효기간 내의

신용평가등급 확인서에 의함

[별지 제19호 서식]

수행능력 자기평가표

항목	세부항목				배점	평점	비고
경영상태	신용평가 등급	회사채 신용평가등급	기업어음 신용평가등급	기업신용평가 등급
		AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5.0
		BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.0
		B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3.0
		CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2.0
	점 수				5.0
수행실적	수행실적	6건 이상			5.0
		4∼5건			4.0
		2∼3건			3.0
		1건 이하			2.0
	점 수				5.0
인력 사항	본 사업 참여인력 현황	6인 이상			5.0
		5인			4.0
		4인			3.0
		3인			2.0
		2인 이하			1.0
		점 수			5.0
부정당업자 제재여부	부정당업자 제재여부	해당없음			5.0
		해당있음			0
		점 수			5.0
합 계					20.0

[별지 제20호 서식]

접수번호

<경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치>

기술제안서

정성평가 제안서

업체명 표기 금지

[별지 제21호 서식]

접수번호

경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치

기술제안서

< 제안서 발표자료 >

업체명 표기 금지

[별지 제22호 서식]

경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치

가격제안평가

제출서류

- 밀봉하여 제출 -

[별지 제23호 서식]

가 격 제 안 서
사 업 명		<경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치>
발 주 기 관		(재)경기문화재단 경기도어린이박물관
제 안 업 체
기 간		착수일로부터 2024년 12월 31일
제 안 금 액		일금 원 (￦ )
	구 분		금 액	비 고
	제 안 금 액			부가세 포함
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임 : 세부산출내역서 1부 2024년 월 일 입 찰 자 : 직인 (재)경기문화재단 대표이사 귀하

[별지 제24호 서식]

		접수번호
		접수확인
경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치 입찰참가 제안서 제출증

경기문화재단에서 발주한  <3층 상설 전시 설계 및 제작·설치>에 참가하고자 이와 같이 입찰참가 제안서를 제출합니다.

※ 제출도서

1) 제안설명서 11부	2) 기타 구비서류

대표업체	업 체 명	대 표 자	제 출 자
		(인)	(인)

2024년    월    일

(재)경기문화재단 대표이사 귀하

--------------------------------------------------------------------

		접수번호
		접수확인
경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치 입찰참가 제안서 접수증

경기문화재단에서 발주한 <경기도어린이박물관 3층 상설 전시 설계 및 제작·설치>에 입찰참가 제안서를 접수하였으므로 이와 같이 접수증을 교부합니다.

대표업체	업 체 명	대 표 자	제 출 자
		(인)	(인)

2024년   월   일

(재)경기문화재단 대표이사

[별지 제25호 서식]

질  의  서

접수번호 :

발송일시
업 체 명	대표자 : (인)
담 당 자	소 속 : 직 위 : 성 명 : (인)
연 락 처	전 화 : ( ) - FAX : ( ) -
제안요청서 페이지
질의내용
(재)경기문화재단 대표이사 귀하

[별지 제26호 서식]

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 건축공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024  년  월  일

주 소		주 소
업 체 명	대표업체	업 체 명	구성업체
대 표 자	(인)	대 표 자	(인)
전화번호		전화번호

[별지 제27호 서식]

공동수급체 합의각서

입찰공고번호	2024 - 호	입찰일자	2024년 월 일
입찰건명

우리는 위의 입찰에 분담공동수급체를 결성 입찰에 참여하고자 귀 시에서 정한 각종 조건, 입찰유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 협상한 금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2024  년   월   일

○ 공동수급체 대표자              주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :                  (인)

사업자등록번호 :

주민등록번호 :

○ 공동수급체 구성원              주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :                 (인)

사업자등록번호 :

주민등록번호 :

(재)경기문화재단 귀하

[별지 제28호 서식]

공동수급회사 조직도

[별지 제29호 서식]

현장설명회 참가 신청서
※ 참가(등록) 번호			경기문화재단 공고 제2024 -
접 수 일 자			2024년 월 일
제 출 자 (대표사)	상 호 명
	대 표 자
	주 소
	전 화
상기와 같이 경기문화재단 경기도어린이박물관에서 발주하는 『경기도어린이박물관 3층 상설전시 설계 및 제작 설치』 현장설명회 참가하고자 첨부와 같이 제출합니다. 첨부서류 1. 위임장 및 재직증명서 1부(신분증 필히 지참) 2. 사용인감계 및 (법인)인감증명서 각 1부 3. 사업자등록증 사본 1부 4. 조달청경쟁입찰참가등록증 사본 1부. 2024년 월 일 제출자 : (인) (재)경기문화재단 경기도어린이박물관 귀하
-------------□------------ 절 취 선 --------------□-----------
현장설명회 참가 확인서
※ 참가(등록)번호		경기문화재단 공고 제2024 -
상 호 명
대 표 자				연락처
신 청 자		소속: 직위: 성명: (인)
확 인 자		소속: 직위: 성명: (인)
상기와 같이 『경기도어린이박물관 3층 상설전시 설계 및 제작 설치』 현장설명회에 참가하였음을 확인합니다. 2024년 월 일 (재)경기문화재단 경기도어린이박물관장 “관인생략”